‘18년도 140기 전기자동차 공공급속충전기

구매 추진계획 보고

2018. 10.

한국환경공단

자동차환경계획팀

추진목적

□ 전기자동차 중·장거리 통행지원 및 긴급충전에 대비한 공공급속충전시설 설치로 운행거리 제한에 따른 사용자 불안감해소 및 원활한 운행기반 구축필요

□ 미세먼지관리특별대책(정부합동 17.9)에 따라 ‘22년까지 전기자동차 35만대 보급 및 급속충전기 1만대 구축 목표

□‘18년도 전기자동차 공공급속충전기는 1,070기 구축을 위한 급속충전기 제작·구매 추진 중 낙찰차액이 발생하여 140기 추가 발주

추진계획

□ 계 약 명 : ‘18년 140기 전기자동차 공공급속충전기 제작·구매

□ 추진기간 : 계약일로부터 180일

□ 계약방법 : ｢2단계 경쟁 등의 입찰(규격·가격동시입찰)｣

- 본 용역은 공공급속충전기에 대한 이해도․전문성과 충전기설치 시 고압전기(380V,3상)를 다뤄야 하는 시설물로 공공시설물의 안전성이 요구됨.

- 이에 따라 관련 법규(국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제18조)에 근거하여 ｢2단계 경쟁 등의 입찰(규격·가격동시입찰)｣방식으로 추진

□ 사업내용

- 국내 표준규격 및 환경부 지침을 준용한 전기차 급속충전기 제작·납품

·설치지점별 다양한 급속충전기 제작(초고속급속충전기, 다채널급속충전기 등)

·사용자 안전성 및 편의성을 고려한 충전시설 설치, 규격서를 준용하여 제작

·「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따라 공인시험기관의 인증을 받은 제품이어야 하며, 증명서와 공인기관 시험성적서를 제출하여야 한다.

·또한 관련법령에 따라 인증이 아닌 공인시험기관의 성적서만으로 가능한 제품은 필히 인증항목에 해당하는 시험기준을 만족하여야 하며 공인시험기관 성적서를 제출하여야 한다.

·시공업체와 협의하여 충전기 설치가 가능한 지점까지 이동하차

- 설치지점과 급속충전기설치유형에 따른 캐노피 제작(필요시 캐노피 디자인)

□ 제작수량 및 사업비 (붙임1-권역별 수량·사업비참고)

구분	설치유형	단위	제작수량	단가 (만원)	금액 (백만원)
급속 충전기	1ch 100KW (DC 콤보)	EA	110
	2ch 100KW (DC 콤보)	EA	30
	소 계	-	-
캐노피	단독형 캐노피 1구형	EA	140
	소 계	-	-
합 계		-	-	-

※ 현장설치여건에 따라 설치지점 또는 위치 변동가능이 가능하고 그에 따른 급속충전기 및 캐노피 유형별 수량변동 가능

※ 급속충전기 유형은 현장여건에 따라 일부 달라질 수 있음

※ 급속충전기 및 캐노피 제작단가는 견적서 중 최저가격으로 산정(붙임2)

□ 예산과목 : 전기동차보급활성화사업-자산취득-건설비-건설가계정(1320-214-420-06)

□ 입찰참가 자격기준

(1) “전기용품안전관리법 제3조제3항 및 제11조3항” 및 “전기용품안전기준 및 운용요령(기술표준원 고시 제2014-1호)”에 따라 전기자동차용 충전장치(세부품명번호 10자리 2611170403)를 제조하는 업체

(2) 건설산업기본법령에 의한 전문공사업 중 금속구조물·창호업종을 보유한 업체

(3) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조(부정당업자의 입찰참가 자격제한)에 해당되지 않는 자

(4) 공동도급 가능함(분담이행방식만 허용)

- (1)항 및 (2)항 요건을 모두 갖추지 못한 경우 (1)항 만족업체는 (2)항 만족 업체와 2인 이내로 구성된 공동수급에 의한 분담이행방식으로 입찰참가가 가능함.

추진일정

세 부 업 무	‘18년 4분기			‘19년 1분기									‘19년 2분기
	12월			1월			2월			3월			4월			5월			6월
․ 현장조사
․ 실시설계
․ 충전기 제작 및 설치
․ 시운전 및 준공검사

[붙임1]  설치계획 및 권역별 설치(안)

[붙임2]  비교견적서 (급속충전기, 캐노피)

[붙임1]

첨부1	‘18년 140기 급속충전기 설치 계획(안)

□ 개 요

○ (목적) 전기자동차의 중·장거리 운행 및 긴급 충전에 대비한 공공 급속충전시설 설치로 운행기반의 확대 구축

○ (설치 수량) 급속충전기 140기[100kW 멀티형 급속]

○ (사업비·기간) 7,140백만원, ‘18.12 ~ ’19.6(계약일로부터 180일)

□ 추진 계획

○ ‘19. 5월말까지 설치 완료, 6월말까지 검사 및 시운전으로 ’19년 상반기내 완료

- (설치사양) 전기차 배터리용량 증가에 따라 충전시간 단축을 위한 고용량 급속충전기 설치(충전기용량 100kW급)

- (설치지점) 충전인프라 부족 지역 해소와 기존 설치장소 추가설치

- (지점선정) 설치후보지점 조사는 계약예정인「’19년 지점선정 타당성조사」용역 추진을 통해 지점선정

* 지자체 수요조사 및 설치유형 발굴 등을 통한 설치후보지점 파악

* 현장조사 지점은 충전기 설치수량(140기)의 1.5배 이상 조사필요